함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	여과지 밸브 전원 분전반 구매설치 납품기한 연기 요청

1. 정수시설과-1902(2015.6.8)호와 관련입니다.

2.「여과지 밸브 전원 분전반 구매설치」건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 여과지 밸브 전원 분전반 구매설치

나. 계약업체 : 경인엔지니어링㈜ 대표 정재원

다. 계약금액 : 금65,484,000원(금육천오백사십팔만사천원)

라. 계약기간 : 2015. 3. 2. ~  2015. 6. 10.

마. 변경내용

- 납품기한 연기

구 분	변경 전	변경 후
계약기간	2015.3.2 ~ 2015.6.10	2015.3.2 ~ 2015.7.20

- 계약금액 : 변경없음

바. 연기사유 : 「여과지 밸브 전원 분전반 구매설치」건은 여과지 밸브                                 전원공급 전기공사와 병행하여야 하므로 전기공사 준공                                기한에 맞춰 납품기한 연기 필요

붙임 : 1. 납품기한 연기 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	김영민		정수시설과장	06/08 代김향석
협조자	주무관	하수용
시행	정수시설과-1906	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5872	/전송		/		/	대시민공개