문서번호	도로포장연구센터-895
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	센터장	품질시험소장
김태우	백종은	06/08 권영찬

서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석용역 추진계획(안)

2015.06

서울특별시 품질시험소

(도로포장연구센터)

「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서」

분석용역 추진계획(안)

서울시도 3년주기 도로포장 표면상태 전수조사 중 1단계(‘14년도) 조사·분석 구간(L=2,468km)에 대해 노선별, 사업소별 포장상태, 보수공법 분석 및 예산의 효율적 집행을 위하여 「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서」분석용역을 추진하고자 함

Ⅰ		추진배경 및 필요성

□ 추진근거

○ 지속가능한 도로포장연구센터 당면현안 및 발전방안 보고

【도로포장연구센터-565, 2015.04.03. 행정2부시장 방침 제 110호】

○ 도로포장상태 조사계획 보고

【도로관리과-2960호, ‘14.02.21】

□ 용역의 필요성

○ 서울특별시도의 포장도로 유지관리를 위해 2012년부터 포장상태 조사 및 분석 등 자체 운영을 시작하였으며 3년주기 전수조사 중 1단계(2014년) 조사자료(L=2,468km)에 대한 포장상태 분석 결과를 검토하고자 함

○ 서울특별시의 전반적인 포장상태 및 사업소, 노선별 SPI를 분석하여 예상되는 소요예산을 검토하여 효율적인 포장도로 유지관리 방향을 설정하여야 함

○ 이에, 단계별 분석보고서를 작성하여 지속적인 D/B를 구축하여야 함

Ⅱ		용역개요

□ 과 업 명 : 「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서」

□ 과업목적

○ 서울시 3년주기 도로포장 표면상태 전수조사 중 1단계(‘14년도) 조사·분석 구간(L=2,468km)에 대해 노선별, 사업소별 포장상태, 보수공법 분석, D/B구축 및 예산의 효율적 집행을 위한 분석 등에 관한 보고서 작성

□ 과업기간 : 계약일로부터 60일

□ 소요예산 : 19,000천원(부가세 제외)

□ 과업범위

○ 1단계 조사, 분석자료를 이용하여 운영 결과보고서 작성

• 서울시 포장관리체계 현황

• 조사대상구간 선정 및 조사

• 노선별, 사업소별 포장품질등급(SPI) 현황분석

• 최종 보수공법 및 보수 우선순위 결정

• 투자예산분석 결과

• 부록(조사분석 현황표 등)

• 기타 제안사항

□ 주요 과업내용

○ 서울시 포장관리체계 현황

○ 조사대상구간 선정 및 조사

○ 노선별, 도로기능별, 사업소별 포장품질등급(SPI) 현황분석

○ 최종 보수공법 및 보수 우선순위 결정

○ 투자예산분석 결과

○ 부록(조사분석 현황표 등)의 작성

○ 기타 제안사항

□ 기술용역 선정방법 : 소액수의계약

Ⅲ		세부 과업내용

1. 서울시 포장관리체계 현황

○ 서울시 포장관리체계(PMS)의 그간 추진내용 및 현재 운영현황

○ 서울시 포장관리체계 검토에 필요한 예산, 보수물량 등 관련자료 수집

2. 조사대상구간 선정 및 조사

○ 1단계 조사(2014년) 조사대상구간 현황을 분류하여 대상노선 및 노선연장 선정

○ 1단계 조사현황을 바탕으로 2∼3단계 조사대상 계획수립을 위한 노선조정에 관해 필요한 사항 제안

3. 노선별, 도로기능별, 사업소별 포장품질등급(SPI) 현황분석

○ 서울시 포장관리 전산시스템에 입력된 1단계 조사자료를 활용하여 서울시 포장상태 현황에 대한 내용 검토

○ 노선별, 도로기능별, 사업소별, 서울시전체 등 분류 형태별 분석

○ 전반적인 포장상태에 대한 파손특성 및 변화 검토

4. 최종 보수공법 및 보수 우선순위 결정

○ 서울시 포장도로에 적용하고 있는 유지관리 의사결정논리를 바탕으로 1단계 조사대상 구간에 대한 보수공법 및 우선순위 결정

○ 노선의 행선별 자료를 이용하여 보수공법 및 우선순위를 결정하고 사업소별 비교

5. 투자예산분석 결과

○ 서울시 포장도로 상태조사자료를 이용하여 중기 포장도로 유지관리예산에 대한 투자방안 검토

○ 투자예산분석을 위하여 현재 서울시에서 적용하고 있는 노선의 행선별(또는 차로별) 100m 자료를 기초자료로 활용하며 관리방안에 따른 공사 소요예산 검토

○ 예산분석시 필요한 파손예측모형의 적용은 서울시와 협의하여 반영

6. 부록(조사분석 현황표 등)의 작성

○ 보고서 작성에 필요한 수집자료 및 검토자료에 대해 부록으로 수록

7. 기타 제안사항

○ 본 과업을 수행하면서 서울시 포장관리체계 운영에 필요한 문제점 및 개선사항, 제안사항 등 제시

Ⅳ		과업 추진계획

□ 용역발주 : ‘15. 6월

□ 용역계약 : ‘15. 6월

□ 용역수행 : ‘15. 6 ~ ’15. 8(계약일로부터 2개월)

○ 최종보고 1회

붙임 : 1. 과업내용서.

2. 산출내역서.  끝.