문서번호	정수시설과-5251
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
오재승	유영춘	06/08 임정규

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

(취수유량계 맨홀 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

영등포아리시정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

취수유량계 맨홀 정비공사를 시행중 물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의 의결 내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

공사현황

공 사 명 : 취수유량계 맨홀 정비공사

도 급 자 : (주)대한이엔씨 대표 양종택

도 급 액 : 금29,494,240원

착 공 일 : 2015.05.12

준공기한 : 2015.06.09

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 공업5급 유영춘

위   원 : 공업6급 양묘식 외2명, 간사 1명

일   시 : 2015.06.08.(월) 13:30 ~ 14:00(2층 사무실)

안   건 : 취수유량계 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

신규공종 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초	변경
공급가액	26,813,537	24,486,364	감)2,327,209
부가가치세	2,681,357	2,448,636	감)232,721
도급비계	29,494,930	26,935,000	감)2,559,930

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 함.

붙 임 : 심의 의견서 1부.  끝.