문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4293
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
정예자	김기중	06/08 김상근
협 조
	관리팀장		김환형

상상톡톡미술관 어린이 체험교육 활성화를 위한

미술관 2층 카페 이설공사 관련 검토보고

2015. 6.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

상상톡톡미술관 어린이 체험교육 활성화를 위한

미술관 2층 카페 이설공사 관련 검토보고

상상톡톡미술관 옥상 공간을 활용하여 어린이 미술프로그램과 체험교육 프로그램을 확대 운영하기 위한『상상톡톡미술관 2층 카페 이설공사』와 관련하여 예산 및 안전관리 등 제반사항을 검토하고 보고드림.

Ⅰ		개 요

건     명 : 상상톡톡미술관 2층 카페 이설공사

면     적 : 8.75㎡

사업내용 : 현 미술관 2층 카페를 인근 외부공간으로 이전·설치하여

프로그램 운영공간 마련

공사기간 : 계약일로부터 10일 이내

소요예산 : 18,054,000원

Ⅱ		공사내용

카페 장비 이설(20ton) 및 카페 내부 기계·기구 장비 이전

각종배관 바닥 및 외부벽체 내부로 매립

전기, 설비, 급수 설치 및 집수정 신설, 기존 마감재 재설치 및 폐기물 처리 등

< 도면 및 이설위치 >

도 면	이설위치

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 18,054,000원

- 산출내역 : 공사비 17,700,000원 + 위탁수수료 354,000원(사업비의 2%)

세부 산출내역

비 목			금 액	구 성 비	적용기준
순공사원가	재료비	직접재료비	5,601,230
		간접재료비	-
		작업설,부설물	-
		소계	5,601,230
	노무비	직접노무비	6,780,956
		간접노무비	271,238	직접노무비*4%	직접노무비*9.6%
		소계	7,052,194
	경비	기계정비	727,000
		폐기물처리비	150,000
		건강/연금보험료	-	1개월 이상 적용	1개월 이상 적용
		산재보험료	267,983	노무비*3.8%	노무비*3.8%
		고용보험료	44,429	노무비*0.63%	노무비*0.87%
		안전관리비	-		4,000만원이상 적용
		기타경비(공과잡비)	657,978	(재료비+노무비)*5.2%	(재료비+노무비)*5.2%
		소계	1,847,390
순공사원가			14,500,815
일반관리비			725,041	순공사원가*5%	순공사원가*6%
이윤			866,216	(노무비+경비+일반관리비)*9%	(노무비+경비+일반관리비)*15%
공급가액			16,092,072
부가가치세			1,609,207	공급가액의 10%	공급가액의 10%
총공사비			17,700,000		1,279원 절사
절사금액			1,279

Ⅳ		검토결과

상상톡톡미술관에는 아이들을 위한 체험교육 시설이 없는 바, 미술관 2층 소재 카페를 이설함으로써 활용도가 저조한 옥상공간을 체험 프로그램 등 운영공간으로 전환함으로써 문화사업 활성화에 기여

교육공간 확보로 다양한 프로그램을 상시 운영할 수 있으며, 접근성이 좋은 인근 외부공간으로 카페를 이전하여 공원이용객의 편리성 및 만족도 제고에 기여

문화사업 활성화 도모를 위해 필요한 사업으로 문화사업수익금 중 일부를 공사비로 사용하는 것이 타당

※ 협약서 제12조(수입금의 징수·처리) 제3항 후단 규정

「필요한 경우 수익금 중 일부(수익금의 50% 미만)를 사전에 “시”의 승인을 받아 문화사업관리운영비(인건비 등 경상비 제외)로 사용할 수 있다」

Ⅴ		승인조건

시공시 시민통행 및 안전에 문제가 없도록 조치

시공사로 하여금 시방서를 완전히 숙지토록 하고 부실시공 사례가 없도록 관리·감독 철저

시설물 안전관련 긴급상황이 발생하지 않도록 문화·편익시설 전반에 대한 안전점검 활동 강화

별첨 : 관련 공문 1부.  끝.