함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	(주)대원일렉콘 대표 박윤섭
(경유)
제목	전기설비 유지보수 공사 작업지시 1차 변경지시

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에 1차 작업지시한 사항에 대하여 아래와 같이 변경하오니 안전한 작업이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시 1차 변경 내용

① 무정전 전원장치(UPS) 밧데리 최신 제품(제조일자 6월)
사용하여 설치

② 사당4배수지 2지 수위계 교체 1건 취소

③ 준공기한 변경

구분	변경전	변경후
준공기한	2015.6.30.	2015.7.15.

나. 1차 준공서류 제출 : 2015. 7. 15. 까지

.끝.

	남부수도사업소장
주무관	이원준		기전팀장	代이원준		시설관리과장	06/09 우종근
협조자
시행	시설관리과-12658	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4617	/전송	02-3146-4639	/	wonjun76@seoul.go.kr	/	대시민공개