투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	sk임업(주) 이성윤 대표, (주)승일토건 박영온 대표 귀하
(경유)
제목	준공검사 지적사항 이행요청 및 향후계획 알림

1. sk임(경)-15-174(2015.6.8.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 귀사에서 회신하신 계약금액 조정건에 대한 회신공문의 주요 내용은 계약금액 조정건에 대해 불수용하겠으며, 공사에 대해서는 준공검사시 지적된 사항을 조속히 완료하겠다는 내용으로 사료됩니다. 이에 따라 준공금액은 최종 설계 변경 계약된 금액으로 처리할 계획이며, 책임건설사업관리단에서 진행한 2차준공검사 시(2015.6.5.) 지적된 사항은 조속히 보완해 주시고, 보완완료 시까지는 지체상금을 부과할 계획임을 알려 드립니다.

3. 아울러 경춘선 공원화사업은 전면 책임건설사업관리 현장으로 계약  금액 조정 및 공사준공처리에 대한 모든 문서 제출 및 협의는 ㈜승일토건과 공동명의로 건설사업관리기술단에 제출하여 절차가 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	전지홍		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	06/09 임춘근
협조자	주무관	代박계현
시행	방재시설부-7703	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 14층	/
전화	3708-8733	/전송	3708-8756	/	bethechange@seoul.go.kr	/	대시민공개