투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역 설계변경(총괄 11회, 8차 1회) 시행

´중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리(총괄 11회, 8차 1회)용역′에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역

나. 용역규모 : 고도처리 88만톤/일, 시설현대화 25만톤/일

다. 용 역 비 : 7,308,740천원(8차 770,000천원)

라. 용역기간 : 2008.11.10~2016.2.28.(8차 2015.2.25.~2015.12.23):

마. 도급업체 : 주)한국종합기술 외 1

바. 설계변경사유 : 안전점담 감리원 추가 투입 및 기계공사 진행사항을 반영한 기계보조 감리원 배치기간 변경

사. 예산과목 :

- (하수도사업특별회계)물관리정책관 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 시설현대화, 감리비(원인행위액 770,000천원)

- (일반회계) 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진, 감리비(원인행위액 82,000천원)

아. 설계변경내역

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감
용역 금액	총괄	7,308,740천원	7,390,740천원	82,000천원
	8차	770,000천원	852,000천원	82,000천원
용역 기간	총괄	2008.11.10 ∼ 2016.02.28	변경없음	-
	8차	2015.02.25 ∼ 2015.12.23	변경없음	-

붙임 1) 방침서 1부.

2) 변경내역서(총괄 11회, 8차 1회)  각 1부.

3) 합의각서 2부.    끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		환경시설과장	윤방식		방재시설부장	06/09 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-7706	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) (프리미어플레이스 14층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개