문서번호	건축기획과-4718
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	건축기획과장
권재철		代김유식	03/05 이용건
협조
	주무관		이정주

주택사면 DB구축 용역 설계변경

2014. 3

주 택 정 책 실

(건축기획과)

주택사면 DB구축 용역 설계변경

건축물의 재건축 등으로 주택사면 철거 등에 따른 물량 감소와 현장조사 시 실측한 시설물 제원을 반영하여 설계변경 시행코자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 주택사면 DB구축 용역

□ 용역개요 : 주택사면 현장조사 등 실시 및 재해위험도 평가

○ 물 량 : 당초 596개소

변경 542개소 (감 54개소)

□ 용역기간 : 2013. 5.24. ~ 2014. 3.23

□ 계약금액

○ 당 초 : 363,900,000원

○ 변 경 : 354,100,000원

○ 증·감 : 감 9,800,000원

□ 계 약 자 : 미승씨앤에스검사㈜

Ⅱ		설계변경 내역

□ 설계변경 사유

○ 건축물의 재건축 등으로 주택사면 철거 등에 따른 물량 감소

○ 시설물 제원(높이, 연장)을 실측 제원에 맞게 변경

□ 설계변경 주요내용

품 명	규 격	단위	현장조사			정밀점검			비고
			당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
합 계		개소	596	542	△54	24	24	-
석축 보강토옹벽	소 계	개소	129	86	△43	8	2	△6
	50m미만	개소	71	55	△16	4	2	△2
	50m~100m	개소	32	24	△8	2	0	△2
	100m이상	개소	26	7	△19	2	0	△2
옹벽 절토사면	소 계	개소	467	456	△11	16	22	6
	50m미만	개소	204	158	△46	7	9	2
	50m~100m	개소	147	150	3	5	7	2
	100m이상	개소	116	148	32	4	6	2

※ 정밀점검은 현장조사 결과 재해위험도 평가점수가 50점 이상을 대상으로 실시함

□ 용역비 세부 변경내역

단위 : 원

품 명	변경 전	변경 후	증・감	비 고
총 계	363,900,000	354,100,000	△9,800,000
현장조사	123,852,852	119,316,085	△4,536,767
정밀조사	12,392,382	13,098,502	706,120
제경비 등	194,572,948	189,494,504	△5,078,444
부 가 세	33,081,818	32,190,909	△890,909

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.