문서번호	설비부-6805
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	06/09 代이달영
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

전기공사 하도급 계약 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

전기공사 하도급 계약 변경 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련 책임감리원으로부터 제출된 전기공사 하도급계약 변경 내용 적정성을 검토 보고 드림.

Ⅰ				관련근거

○ 서분감 제2015-335(2015.6.5.)

전기분야 하도급 변경계약 통보서 검토의견서 제출

Ⅱ				검토내용

○ 하도급 계약내용                                     (단위 : 천원)

하 도 급 공 종	하수급인	하도급 계약현황			비 고
		원도급액	하도급액	하도급율(%)
전기 및 계측	㈜모아종합전설	2,935,900	2,417,800	82.35
가설인입전기	㈜삼진일렉스	157,300	159,500	101.4

○ 하도급 변경내용(공사기간 변경)

하 도 급 공 종	하수급인	공사기간 변경		비 고
전기 및 계측	㈜모아종합전설	당초	2013.07.08.~ 2015.07.18.	계약금액 증감없음
		변경	2013.07.08.~ 2016.06.30.
가설인입전기	㈜삼진일렉스	당초	2012.11.29.~ 2015.07.18.
		변경	2012.11.29.~ 2015.12.31.

Ⅲ				검토의견

○ 공사기간 변경에 따른 하도급 업체와의 계약 변경사항으로 제반서류        검토 결과 관련규정에 적정함으로 계약내용을 건설총괄부로 통보하고,

책임감리원에게 하도급 및 품질 관리를 철저히 하도록 업무지시         하고자 함.

따로붙임 : 하도급 변경계약 검토의견서 1부. 끝.