문서번호	물재생과-2325
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
홍승지		김일운	06/10 代이재성
협조
	시설팀장		代김민호

유량조절장치 제작 구매

계약심사 결과에 따른 조치계획

2015. 6

유량조절장치 제작 구매

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 유량조절장치 제작 구매를 시행하고자 계약심사과 설계심사 의뢰결과 지적사항에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2015. 5. 14 : 발주 방침

❍ 2015. 5. 29 : 특정제품 심사위원회 개최 결과보고

❍ 2015. 6. 05 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2015. 6. 09 : 계약심사 결과 통보

□ 건 명 : 유량조절장치 제작 구매

위 치	한강 R-13, 한강 R-18
규 격	3500×1500×3500 1개소(3개), 1700×1500×1700 1개소
기 간	계약일로부터 60일

□ 심사결과 : 감 6,310천원(6.0%)

(단위 : 천원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
도 급 비	105,160	98,850	6,310	6.0%

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	105,160	천원
◦	심사금액	:	98,850	천원
◦	절 감 액	:	6,310	천원
◦	절 감 율	:	6.00	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

❍ 규격별 단가 조정

- 유량조절장치(3500×1500×3500) 단가  27,500천원 → 25,850천원

- 유량조절장치(1700×1500×1700) 단가  13,100천원 → 12,314천원

□ 조치계획

❍ 심사결과를 반영하여 재설계한 후 물품구매 발주하고자 합니다.

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.