문서번호	설비부-6865
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	06/10 代이달영

『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』

관급자재(배전반) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  6.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』

관급자재(배전반) 납품기한 연기 검토 보고

「돈화문 국악예술당 건립 전기공사」와 관련하여 선행공종 지연에 따른 관급자재(배전반) 납품기한 연기를 아래와 같이 검토 보고 드림

1. 공사개요

□ 공사규모: 지하3층/지상1층, 연면적 1,800㎡

- 수전용량 350kw, 전력간선설비 및 조명등 설비, 전력제어설비, 무대조명설비

□ 도급금액: 444,312천 원(1차: 100백만 원, 2차: 100백만 원)

□ 시 공 사: 삼언전공㈜ 대표 공석복

□ 감 리 사: ㈜영화키스톤건축사사무소

2. 관련근거

□ 돈화문감 제15-50호(2015.06.08.): 관급자재(배전반) 납품기한 연기요청

3. 관급자재 현황

품명 (규격)	계약번호 (구매관리번호)	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
배전반	12142268300 (1214224900)	㈜동보파워텍 대표 심승용	56,500,000	‘15. 6. 22

4. 납품기한 연기보고

□ 연기사유: 선행공종인 토목공사 및 건축공사 지연 및 율곡로 도로선형 변경에 따른 재설계로 준공기한이 연장됨에 따른 관급자재 설치시기 미도래

□ 납품기한 연기: 당초 -‘15. 6. 22,  변경 -‘15. 10. 16

□ 귀책소재: 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 감리의견: 선행공종의 지연으로 건축공사 준공기한이 연장됨에 따라 관급자재(배전반) 설치 시기가 미 도래하여 납품기한 연기 필요.

5. 보고자 의견

□ 감리원의 검토의견이 타당하다고 판단되어 선행공종인 건축공사 공정 등을 감안하여 관급자재 납품기한을 연기하고자 합니다.

따로붙임 : 관급자재(배전반) 납품기한 연기요청 공문 1부.  끝.