문서번호	하천관리과-9377
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청계천관리팀장	하천관리과장
이병우		김석권	06/10 정중곤
협조

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』

용역 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.   .

도시안전본부

(하천관리과)

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』용역

준공기한 연기 검토보고

『청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계』용역에 대한 청계천시민위원회  마무리 자문 및 투자심사를 위한 공기부족으로 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계

❍ 용역기간 : ‘14. 7. 28. ~  ‘15. 6. 30.

❍ 용역업체 : ㈜동해종합기술공사 대표 정점래

❍ 용 역 비 : 160,219,800원

□ 추진경위

❍ 2014. 08. 22 : 용역 착수보고

❍ 2014. 10. 17 : 전문가 자문회의 개최

❍ 2014. 10. 31 : 1차 중간보고회 개최

❍ 2014. 12. 19. : 2차 중간보고회 개최

❍ 2015. 02. 27. : 3차 중간보고회 개최

□ 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기내용

구 분	과업기간	용역비	비고
당 초	‘14. 7. 28 ~ ’15.6. 30	160,219,800원	용 역 비 변동없음
변 경	‘14. 7. 28 ~ ’15.10.30

❍ 연기사유

- 청계천시민위원회 마무리 자문 및 투자심사 등 4개월 추가 소요

- 기본설계안에 대한 자문결과를 반영하여 실시설계도서 작성,투자심사 등의 절차이행을 위하여 용역기한 4개월 연기가 필요함

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

❍ 청계천시민위원회 마무리 자문 및 투자심사 등의 이행에 필요한  일정을 감안 준공기한을 2015년 10월 30일까지 연기조치 의뢰코자 함.

붙임 : 설계사 연기요청 공문 및 준공기한 연기조치의뢰서 각1부.  끝.