문서번호	설비부-6911
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		유병기	06/10 代이달영
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

도시기반시설본부

설비부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』과 관련,

관급자재 설치시기 미도래에 따른 납품기한 연기 검토결과를 보고 드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

❍ 위    치 : 강서구 양천로 201(서남물재생센터 내)

❍ 규    모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 기존시설 철거 및 상부 공원화

❍ 공사기간 : 2012. 11. ~ 2016. 06.

❍ 시 공 사 : 대림산업(주)

❍ 공 사 비 : 63,516백만원

관련근거

❍ 2015. 05. 15 :  공사용 직접구매자재 납품기한 연기요청

[서분감 제2015-290호(2015.6.9.)]

관급자재 계약현황

구 분	계약번호	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당 초	변 경
협잡물처리기	12142115600	동진기공	1,077,000,000	‘15.06.30	‘15.08.15
크레인 및 호이스트	12142213400	대한민국 특수 임무유공자회	316,500,000	‘15.06.30	‘15.10.15
호퍼	12142290300	㈜대하엠에이	137,834,790	‘15.06.30
공기압컨베이어	12142290800	유성하이텍	262,699,170	‘15.06.30
스크류컨베이어	12142306400	사회복지법인 온누리유공자회	161,000,000	‘15.06.30

감리 연기검토 보고

❍ 연 기  사 유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 설치시기 조정

❍ 납품기한 연기 : 2015. 08. 15, 2015. 10. 15

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 의견

❍ 관급자재의 납품기한 연기가 타당하므로 납기를 연기조치하고 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 직접구매자재 납품기한 연기요청 공문 1부.

2. 납품기한 연기 동의서 각1부. 끝.