투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사 공사기간 연기의뢰

1. 우리 본부에서 추진 중인 『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』공사기간을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사
공사기간	총 차	2013.12.23.~2015.06.22.	2013.12.23.~2015.10.16.	116일 연기
	1차	2013.12.23.~2015.06.22.	2013.12.23.~2015.10.16.
	2차	2014.12.15.~2015.06.22.	2014.12.15.~2015.10.16.
계약금액		총차 금706,894,900원 ▸1차 100,000,000원 ▸2차 100,000,000원	총차 금706,894,900원 ▸1차 100,000,000원 ▸2차 100,000,000원	변경 없음
계 약 자		㈜일성이엔지 외 1개사 대 표 이영희

나. 변경사유 : 율곡로 선형변경에 의한 설계변경 등 선행 공종(토목공사)     지연에 따른 후속 공종인 기계설비 공사기간 연기

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	전결 06/10 代이달영
협조자
시행	설비부-6903	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동96) 프리미어 플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(6)