투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	돈화문 국악예술당 건립 전기공사 준공기한 연기의뢰

우리본부에서 추진중인 『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 전기공사
공사기간	총차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.	116일 연장
	1 차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.
	2차	2014.12.15.～2015.06.22.	2014.12.15.～2015.10.16.
계약금액	총차	금444,312,570원		변경없음
	1 차	금100,000,000원
	2차	금100,000,000원
계 약 자		㈜삼언전공 대 표 공석복

나. 변경사유 : 선행공정인 토목 및 건축공사의 지연, 율곡로 도로선형 계획변경에 따른 재설계로 인하여 후속공정인 전기공사 지연.

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	06/10 代이달영
협조자
시행	설비부-6892	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지 프리미어플레이스 빌딩 15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개