투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	돈화문 국악예술당 건립 통신공사 준공기한 연기의뢰

우리본부에서 추진중인 『돈화문 국악예술당 건립 통신공사』준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		돈화문 국악예술당 건립 통신공사
공사기간	총차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.	116일 연장
	1 차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.
	2차	2014.12.15.～2015.06.22.	2014.12.15.～2015.10.16.
계약금액	총차	금306,739,040원		변경없음
	1 차	금50,000,000원
	2차	금39,620,000원
계 약 자		㈜에스앤티에스 대표 이청대

나. 변경사유 : 선행공정인 토목 및 건축공사의 지연, 율곡로 도로선형 계획변경에 따른 재설계로 인하여 후속공정인 통신공사 지연.

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	06/10 代이달영
협조자
시행	설비부-6890	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지 프리미어플레이스 빌딩 15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개