투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(남부순환로~오정대로 도로개설 전기 및 신호공사-3차수)

우리본부에서 추진중인 『남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사(3차수)』준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

구 분		당 초	변 경	비 고
공 사 명		남부순환로~오정대로간 도로개설 전기 및 신호공사(3차수)
공사기간	총 차	2010.11.29~2015.12.30	2010.11.29~2015.12.30	변경없음
	3 차	2014.09.29~2015.06.30	2014.09.29~2015.10.31	증)123일
계약금액	총 차	620,082,446원		변경없음
	3 차	80,000,000원
계 약 자		(주)삼구전력 대표 황희숙

나. 변경사유 : 선행공종인 토목공사의 지연으로 후속공정인 전기공사의 실 착공이 지연되어 준공기한 연기.

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	06/10 代이달영
협조자
시행	설비부-6893	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지 프리미어플레이스 빌딩 15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개