문서번호	설비부-6889
결재일자	2015.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
박경철	임현근	전결 06/10 代이달영

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』

공사기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

도시기반시설본부

(설비부)

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』

공사기간 연기 검토보고

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』의 공사기간 연기를 위한 검토사항을 보고 드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2015. 6. 22.(총차)

2013. 12. 23. ~ 2015. 6. 22.(1차)

2013. 12. 23. ~ 2015. 6. 22.(2차)

❍ 공사규모 : 지상1층/지하3층(연면적:1,800㎡) 기계 및 소화설비공사 1식

❍ 공사금액 : 706,894천 원(1차 : 100,000천 원, 2차 : 100,000천 원)

❍ 시 공 사 :  ㈜일성이엔지-기계, 대월기전(주)-소방

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사사무소

2		관 련 근 거

❍ ㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문감 제15-53호(2015.06.09.)

- 돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사 공사기한 조정 승인 요청

3		공사기간 연기내용

❍ 연기사유 및 일수

- 율곡로 선형 변경에 의한 설계변경 등 선행 공종(토목공사) 지연으로 공사기간

연기(116일)

❍ 공사기간 연기내용

공 사 명	계 약 자	계약금액(원)	공 사 기 간		비고
			당 초	변 경
돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사	㈜일성이엔지 외 1	총차:금706,894,000	’13.12.23.~ ’15.06.22.	’13.12.23.~ ’15.10.16.	․ 116일 연기 ․ 계약금액 변경없음
		▸1차:금100,000,000	’13.12.23.~ ’15.06.22.’	’13.12.23.~ ’15.10.16.
		▸2차:금100,000,000	’13.12.23.~ ’15.06.22.’	’13.12.23.~ ’15.10.16.

❍ 공사기간 연기 귀책기관 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 건설사업관리단 검토의견

- 선행 공종(토목공사) 지연으로 타공종 진행 등을 고려할 때 공사기간 연기 요청

내용이 적정함

5		보고자 의견

❍ 건설사업관리단의 검토 보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장   여건에 맞게 공사기간을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 공사기간 연기 관련문서 1부.  끝.