문서번호	설비부-6869
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	06/10 代이달영

준공기한 연기 검토 보고

- 돈화문 국악예술당 건립공사(전기,통신) 총차,1,2차 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

[설 비 부]

준공기한 연기 검토 보고

- 돈화문 국악예술당 건립공사(전기,통신) 총차, 1차, 2차 -

『돈화문 국악예술당 건립공사』와 관련하여 시공감리원으로부터 준공기한(전기,통신) 연기 승인요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

1. 검토근거

□ ㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문감 제15-54호(2015.06.09.)호

- 돈화문국악예술당건립 전기,통신공사 공사기한 조정 승인요청의 건

2. 공사개요

건 명		전 기 공 사	통 신 공 사
공사기간	총차	2013.12.23. ～ 2015.06.22.	2013.12.23. ～ 2015.06.22.
	1 차	2013.12.23. ～ 2015.06.22.	2013.12.23. ～ 2015.06.22.
	2차	2014.12.15. ～ 2015.06.22.	2014.12.15. ～ 2015.06.22.
계약금액	총차	금444,312,570원	금306,739,040원
	1차	금100,000,000원	금50,000,000원
	2차	금100,000,000원	금39,620,000원
계약자		삼언전공㈜ 대표 공석복	㈜에스앤티에스 대표 이청대
감 리 사		㈜영화키스톤건축사사무소

3. 준공기한 연기 검토

□ 연기사유 : 선행공정인 토목 및 건축공사의 지연, 율곡로 도로선형 계획변경에 따른 재설계로 인하여 후속공정인 전기, 통신공사의 준공기한 연기.

□ 공사기간 조정

구분			당 초	변 경	비 고
전기공사	공사기간	총차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.	116일 연장
		1 차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.
		2차	2014.12.15.～2015.06.22.	2014.12.15.～2015.10.16.
	계약금액	총차	금444,312,570원		변경없음
		1 차	금100,000,000원
		2차	금100,000,000원
통신공사	공사기간	총차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.	116일 연장
		1 차	2013.12.23.～2015.06.22.	2013.12.23.～2015.10.16.
		2차	2014.12.15.～2015.06.22.	2014.12.15.～2015.10.16.
	계약금액	총차	금306,739,040원		변경없음
		1 차	금50,000,000원
		2차	금39,620,000원

□ 감리원 검토의견

- 선행공정의 지연으로 후속공정인 전기, 통신공사의 준공기한을 연장함이 적정.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 보고자 검토의견

□ 감리원의 준공기한 연기보고가 타당한 것으로 판단되어 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 재무과에 계약변경을 의뢰코자 합니다.

붙임 : 1. 공사기간 조정 승인요청 공문 1부.

2. 시공사 공사기간 연기요청 공문 및 합의서 각 1부.  끝.