문서번호	설비부-6845
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	건축설비과장
박병환	06/10 김영수

『의주로 지하차도 평면화(교통신호 체계 변경)공사』

설계변경 소위원회 자문요청

2015. 6.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『의주로 지하차도 평면화(교통신호 체계 변경)공사』

설계변경 소[본부]위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 강철규		요청일		2015년 6월 일
공 사 명	의주로 지하차도 평면화공사[교통신호체계 변경]
공사개요	공사규모		BOX구간70ⅿ, U-Type옹벽180ⅿ, 토공되메우기180ⅿ
	공사기간		2015. 02. 04. ~ 2015. 12. 31.
	감 리 사		(주)삼보기술단
	설 계 사		㈜신성엔지니어린, (주)유신
	시 공 사		(주)천명토건
자문 안건명			교통처리계획도에 의한 교통신호체계 변경공사 반영				요청금액		증 288,915천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사 중 교통처리계획에 따라 염천교교차로의 교통신호체계(신호등 신설 등) 변경이 필요
원설계자 의견(요약) ○ 내용 : 현장여건상 확실한 증액 요인이 발생되었다면 발주처와 충분한 협의를 통하여 결정
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 의주로 지하차도 평면화공사 공사 중 교통처리계획도에 의한 규제심의 결과 반영 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 교통신호체계공 1식 - 변 경 : 교통신호체계공 1식 - 증 감 : 교통신호체계공 1식					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : 0천원 - 변 경 : 288,915천원 - 증 감 : 288,915천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 교통신호체계공
별첨서류	1. 변경전후 도면 사본 1부. 2. 감리단 검토보고서 사본 1부 3. 설계내역서 1부.					▪ 공사예정시기 2015년 08월 까지 ▪ 소요관급자재 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	의주로 지하차도 평면화공사
계약금액	1,424,875천원	계약일	2015. 1. 29.	시공사	㈜천명토건
공사기간	2015.02.04. ~ 2015.12.31.	낙찰율	86.753%	설계사	신성엔지니어링, 유신
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사			감리사	(주)삼보기술단
공사규모	의주로 지하차도 평면화 BOX구간70ⅿ, U-Type옹벽180ⅿ, 토공되메우기180ⅿ			※ 작성자 : 업무담당 강철규 (☎02-3708-2567)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	-		- 신호등주 신설9본,이설3본 - 신호등 신설24조,이설8조 - 굴착배관배선공사 183M	- 신호등주 신설9본,이설3본 - 신호등 신설24조,이설8조 - 굴착배관배선공사 183M
공 사 비	-		288,915천원	288,915천원
적 용 요 율	86.753%		제요율적용 제외공종(실비)
설계변경요구자	▢ 발주처 ☑ 계약상대자
협의율 적용 근거	-
설계변경 근거	관련근거	토목부-10498호(2015. 5.21.) : 교통신호체계 변경공사 시행 검토보고
	관련규정	공사계약일반조건 제19조의3, 5, 제20조
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	교통처리계획도에 의한 교통신호체계 변경공사 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 의지2015-48호(2015. 5.13.) : 실정보고 승인요청

· 서부도로사업소 기전과-3741호(2015. 4. 9.) : 교통안전시설 원인자부담공사 승인

· 서울지방경찰청 교통관리과-7960호(2015. 3.31.) : 공사 중 교통처리계획 승인

· 토목부-10498호(2015. 5.21.) : 교통신호체계 변경공사 시행 검토보고

· 도시기반시설본부-15-2815호(2015. 5.21.) : 교통신호체계 변경공사 시행 승인

끝.