문서번호	교통운영과-11096
결재일자	2015.6.10.
공개여부	부분공개
방침번호

						시 민
주무관		신호시설팀장		교통운영과장
박지웅		김균호		전결 06/10 강진동
협 조
	교통안전팀장				김세교
	주무관				이상돈
	교통개선팀장				유승효
	주무관				임홍필
	주무관				문기영

2015년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역 시행 계획

2015. 06

도시교통본부

교통운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 도로교통 안전개선사업

교통신호기공사 감리용역 시행 계획

2015년 도로교통 안전개선사업의 교통신호기공사에 대한 공사감리용역을 발주하여 원활하고 안정적인 개선사업을 진행하고자 합니다.

Ⅰ		교통신호기공사 감리용역 발주

감리용역

【단위 : 천원】

용역명	용역기간	교통신호기 공사비	용역 발주금액	계약방법	비고
2015년 도로교통 안전개선사업 교통신호기공사 감리용역	′15.7.1.~′15.12.31.	1,151,000	152,793	일반경쟁입찰 (적격심사대상)

※ 공사비 : 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 공사비

교통신호기공사 공사비

【단위 : 천원】

연번	세부사업명	공사내역	교통신호기 공사비	비고
합 계			1,151,000
1	도로교통 소통개선	한남IC 하부 교차로 외 10개소	403,427	예정금액 (실시설계 진행중)
2	보행불편해소를 위한 횡단보도 확충설비	청계6가 교차로 외 14개소	429,090
3	교통사고 잦은 곳 개선	동대문교차로 외 14개소	297,233
4	도시고속도로 기능 개선	양재IC 외 1개소	21,250

※ 자세한 내역은 붙임문서의 사업대상 현황자료 참조

개략공사비 산정사유

실시설계를 마치고 그 성과물(설계내역서)로 용역을 발주하는 것이 원칙이나, 4개사업 통합 감리진행으로 발생되는 부분사업의 공사지연을 방지하기 위하여 개략공사비로 감리용역을 발주하고자 함.

Ⅱ		세부내역

예산내역

【단위 : 천원】

연번	세부사업명	예산액 (감리비:401-02)	교통신호기 공사비	감리용역비	예산잔액	비고
합 계		433,400	1,151,000	152,793	280,607	교통사고 잦은 곳 개선은 현재 예산담당관과 예산협의중
1	도로교통 소통개선	302,500	403,427	52,000	250,500
2	보행불편해소를 위한 횡단보도 확충설비	88,000	429,090	77,793	10,207
3	교통사고 잦은 곳 개선 (국50%, 자체50%)	32,900	297,233	20,000	12,900
4	도시고속도로 기능 개선	10,000	21,250	3,000	7,000

※ 공통예산과목 : 정책)도시교통체계 및 소통 개선, 단위)교통안전시설물관리(교통사업특별회계)

일부 공사감리 별도진행

보행불편해소를 위한 횡단보도 확충설비의 성동구 경동초등학교 앞의 공사는 시의원(이상묵 의원) 요청사항으로 긴급한 진행을 위하여 본공사 감리용역으로 진행하고자 함.

향후계획

2015.06.10. 기술심사담당관에 기술용역타당성 심사의뢰

2015.06.17. 재무과에 계약 의뢰

붙임  설계내역서 및 사업대상 현황(2015년) 각1부.  끝.