문서번호	토목부-11899
결재일자	2015.6.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	06/10 노우성
협조

구리 한강시민공원 통행로 및 관리용도로 복구 검토보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

구리 한강시민공원 통행로 및 관리용도로 복구 검토보고

구리 한강시민공원 진입로 이전에 따른 통행로 연결 및 공사로 인해훼손된 관리용도로 복구에 따른 검토 보고임.

※ 암사감리 2015 –306호(’15.6.8.) : 구리 한강시민공원 통행로 및 관리용도로 복구 실정보고

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.6.30)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진경위

- 2014.1.7. : 도시계획 실시계획 변경인가(구리시 도시과-182호)

※ 한강둔치내 진·출입로 차단에 대해 별도 진·출입부 설치토록 조건부여

- 2014.12.12. : 조건사항 조치계획 제출(도기본 →구리시 공원녹지과)

※ 진입로 설치 : 1단계 구간 설계완료후 시공 중, 2단계 구간 설계변경 추진 중

- 2014.12.19. : 도시계획시설 실시계획 변경인가(구리시고시 182호)

※ 진입로 설치 등 기 제출한 협의사항 이행토록 조건부여

○ 통행로 및 관리용도로 복구개요

통행로연결	- 구 간 : 진입로 종점 ∼ 주차장 요금소 입구 - 규 모 : 폭 5.0m, 연장 725m(27＠) Asp
관리용도로 복구	구 간 : 고교 야구장 ∼ 중학교 야구장 규 모 : 폭 6.0∼10.0m, 연장 455m(36＠) Con’C

【위 치 도】

【평면도 및 횡단면도】

○ 주요 내용

구 분	통행로 연결	관리용도로 복구
아스콘포장	B=5.0m, L=725m	-
콘크리트포장	-	B=6.0∼10.0m, L=455m
가드레일	L=60m	-
배수관로	-	D=600㎜, L=573m
보차도경계석	L=445m	-

○ 소요 공사비(당초 미반영)

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비고
	통행로 연결	관리용도로 복구	계
도급비	301,000	225,000	526,000
관급비	137,000	65,000	202,000
폐기물처리비	-	45,000	45,000	별도
총공사비	438,000	335,000	773,000

※ 적용단가 : 기 계약 공종 → 계약단가 적용, 신규단가 → 협의율(85.367%) 적용

○ 감리 검토의견

- 구리암사대교 아천IC 램프(C구간)설치로 구리시 한강시민공원 진입로가 이전 설치됨에 따라

- 실시계획인가 조건사항 이행을 위한 건으로 구리시(공원녹지과) 협의에 의해 이전된 진입로와 연결하여 통행로 설치(진입로 → 주차장 요금소) 및 공사로 훼손된 관리용도로 복구는 당초 설계 미반영된 사항으로 추가공사비 반영은 타당함.

□ 조치계획

○ 상기내용과 같이 책임감리원이 제출한 ‘한강시민공원 통행로 연결 및 관리용도로 복구’ 실정보고건에 대해 승인하고 추후 본부 설계변경자문위원회를 거쳐 설계변경시 시공 결과에 따라 정산처리토록 조치코자 함.

- 한강시민공원 통행로 연결 및 관리용도로 복구 : 증) 773백만원

※ 도급비 526백만원, 관급비 202백만원, 폐기물처리비 45백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.