문서번호	도로보수과-5797
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
최정필		이규철	06/11 임대성
협 조
	주무관			이상하

「용산2가동 한신아파트앞 방음벽 개량공사 실시설계용역」관련

용역 중간보고회 및 특정제품 선정 심사위원회 개최 계획

2015. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

「용산2가동 한신아파트앞 방음벽 개량공사 실시설계용역」관련

용역 중간 보고회 및 특정제품 선정 심사위원회 개최 계획

『용산2가동 한신아파트앞 방음벽 개량공사 실시설계용역』추진과 관련하여 성공적인 용역수행을 위한 중간보고회 및 우수제품 선정을 위한 특정제품 선정 심사위원회 개최 계획 보고임

용역개요

□ 용 역 명 : 용산2가동 한신아파트앞 방음벽 개량공사 실시설계용역

□ 용역내용

○ 방음벽 시설 개선공사(높이상향 조정 2.0→3.0m, L=327m)

- 차량통행 소음 차단효과 확보 및 주변경관 개선

□ 용 역 비 : 22,951천원

□ 계약업체 : ㈜케이알티씨  대표 이상진

□ 용역기간 : ‘15. 3.13 ~ 7. 10

중간보고회 및 특정제품 선정 심사위원회 개최계획

□ 일  시 : 2015. 6. 17(수) 15:00

□ 장  소 : 사업소 2층 소회의실

□ 특정제품 선정 심사위원회 구성(총 6명)

○ 위원장 : 사업소장

○ 위  원(5명)

- 서울시 도로관리과(팀장) 김순수

- 용산구청 토목과장 전승진

- 시공분야  SQ엔지니어링(주) 전용형

- 구조분야  ㈜이원이앤지 오세준

- 환경분야  ㈜유신 최경돈

□ 회의안건

○ 실시설계 용역 내용 등의 검토

○ 방음벽 개량에 따른 형식 및 재질 검토

○ 특정제품(방음판) 선정에 관한 심의

○ 기타 실시설계 도서 검토 등

심사위원 수당 지급

□ 참여수당 : 750천원(150천원×5명)

○ 특정제품선정위원회 참여 및 검토의견서 작성 수당

○ 관련근거 : 2015년 시설안전자문단 수당지급 기준 준용

(도로시설과-1383(‘15.2.2)호)

○ 지급방법 : 실시설계 용역 설계내역서에 수당 반영

(용역업체에서 무통장 계좌 지급)

□ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리

(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 사무관리비

향후 추진계획

□ ‘15. 6.26 : 중간보고회 의견 반영한 사업 자료 작성

(방음벽 개선 전·후 조감도)

□ ‘15. 6.30 : 용산 제2선거구 이종필 시의원 방문 사업설명

□ ‘15. 7. 3 : 용산구청 토목과 및 용산2가동주민센터 서면통보

(※ 주민설명회 갈음)

□ ‘15. 7.10 : 용역 준공 및 공사비 배정요청

□ ‘15. 7.31 : 공사 발주

□ ‘15. 8. ~ 11.30 : 공사 시행(준공)

붙임 : 1) 위치도 및 현황사진 1부.

2) 특정제품선정 심사위원회 심의요청서 1부.

3) 용역 중간보고회 자료(제품 비교표) 1부(별도 보고).   끝.