문서번호	방재시설부-7800
결재일자	2015.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	06/11 임춘근
협조
	주무관		김달용

『경의선숲길 공원조성공사』

공원환경개선 실정보고 검토

2015. 06

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

공원환경개선 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 공원 환경개선에 대한 건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015-539(2015.06.04)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

검토내용

○ 실정보고 사유

- 『경의선숲길 공원조성공사』 1차공사 완료구간(새창고개,연남동,염리동)은     인접 주민과 공원 이용객의 편의를 위하여 전면 개방되어 공용 중에 있으나     유지관리기관으로 인수·인계가 되지 않아 무단 불법쓰레기 투기로 인한      민원이 지속적으로 발생되어 공원관리를 위하여 정비 인력 배치코자 함.

○ 시행방안

- 보통인부(87,805원, 2015년 상반기 단가적용) 2인 1개조 배치

- 유지관리기관 인수·인계와 공원 개원식 등을 고려하여 1개월 시행

○ 소요비용

- 공원 환경개선비 : 7,990천원(부가세 포함)

- 산출근거

· 보통인부(2015년 상반기 노임) 2인 1개조 30일 적용

· 종량제 봉투(고시가격) 300장 적용(10장/일×30일)

· 공구손료(노무비의 3%) 및 잡재료비(주재료비의 5%) 적용

· 협의율(86.5%) 적용

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길 공원조성공사』 공원 환경개선에 대하여 검토한 결과 불법쓰레기 투기 등으로 공원 미관에 지장을 초래하고 있는 1차공사 완료구간에 대하여 유지관리기관 인수·인계, 공원 개원식 등을 고려하여 관리인력을 배치하여 공원 이용객의 쾌적한 환경을 제공함은 타당하며,

○ 공사계약일반조건 제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)에 의거 설계 반영은 적정하고, 소요비용은 적절하게 산출 반영된 것으로 판단됨

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 1차공사 완료구간 공원 환경 개선에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보코자 하며, 차후 설계변경 시 반영토록 조치코자함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.