문서번호	시설관리과-12119
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강서수도사업소장
박학중		이자원	06/12 이상래
협조
	주무관		문병희

시민과 함께 만들어 가는 안전도시 서울

설 계 변 경 계 획(최종) [2014년 양천, 강서, 구로구일대 긴급누수복구공사]

2015.  6.

강서수도사업소

(시설관리과)

설 계 변 경 계 획(최종)

우리사업소에서 시행중인 「’14년 양천, 강서, 구로구 일대 긴급누수복구공사」와 관련하여 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경을 시행코자 함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속)

나. 공사개요 : 누수복구 1,200개소, 불용관 및 노후관 정비 450개소

다. 계 약 일 : 2014. 5. 12

라. 착 공 일 : 2014. 5. 19

마. 준공기한 : 2015. 6. 30

바. 계약금액 : 금2,555,653,790원

사. 도 급 자 : 상협건설,  대표 주상호

2. 설계변경 사유

가. 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

- 신규공종 : KP이탈방지압륜철거(150mm)외 33개 공종

- 물량증가 : 콘크리트 포장깨기(0.4㎥, 누수)외 228개 공종

- 물량감소 : 안전시설 설치 및 철거(지선)외 552개 공종

나. 주요공종 물량변경 내용

공 종	단 위	당초수량	변경수량	비고(증ㆍ감)
인력터파기(용수, 협소 견질토사 0-1, 누수)	㎥	2,353	3,086	증) 733
아스팔트 포장절단(100~150mm, 야간)	m	250	142	감) 108
되메우기(인력,누수)	㎥	4,374	4,890	증) 516
KP 이탈방지압륜 접합(150mm, 야간)	개소	10	-	감) 10

공 종	단 위	당초수량	변경수량	비고(증ㆍ감)
주철관 절단공(절단기사용) 100mm(누수)	개소	44	12	감) 32
안전시설 설치 및 철거(지선, 누수)	회	1,349	843	감) 506
교통정리원	HR	1,674	2,618	증) 944
계량기 설치공(40-50mm)	개소	113	143	증) 30
방진덮게 깔기(1m당)	건	872	243	감) 629

3. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
총 공 사 비	2,891,865,790	2,869,081,000	감) 22,784,790
도 급 비	2,555,653,790	2,562,241,000	증) 6,587,210
감사 감액금		-7,040,000	감) 7,040,000
계	2,555,653,790	2,555,201,000	감) 452,790
관급 자재비	136,212,000	113,880,000	감 )22,332,000
이 전 비	200,000,000	200,000,000	-

- 2014년 정산에 따른 차수별 금액 현황                              (단위 : 원)

구 분	총부기금액		1차분		2차분
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
도급비	2,555,653,790	2,5555,201,000	1,295,690,000	1,295,690,000	1,259,963,790	1,259,511,000

4. 조치계획

- 사업소 자체 심의 후 신규공종 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행.

따로붙임  1. 설계변경내역서 1부

2. 신규공종 및 물량증감 내역 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 누수복구총괄 : 문병희 ☎3146-4007 담당 : 박학중☎3146-4011