문서번호	기전과-4046
보존기간	년
결재일자	2015.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	06/12 이종엽
협조

기전시설물 유지관리 부족예산 확보계획 보고

〈 2015년 도로기전시설물 일상 유지보수공사 〉

2015. 6

성동도로사업소

기전과

기전시설물 유지관리 부족예산 확보계획 보고

2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사 시행중 사업 예산이 소진되어 추가배정 요구 및 낙찰차액 등을 사용하여 2015년 12월말까지 정상 추진코자 예산을 확보코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 기전시설물 일상유지보수공사(연간단가계약)

○ 공사개요 : 도로기전시설물(조명, 배수펌프등) 유지보수 1식

○ 도 급 액 : \112,641,040

○ 공사기간 : 2015. 2.27 ~ 2015.12.31

○ 도 급 자 : (주)영신이앤씨  이경애

□ 예산확보 사유

○ 마장지하차도 배수펌프 지중선로 교체완료(50,000천원)

- 절연불량(0.1㏁~0.3㏁)에 따른 우기전 긴급교체

○ 워커힐고가 노후 가로등선로 교체예정(50,000천원)

- 절연불량(0.2㏁~0.3㏁)에 따른 교체

□ 예산현황

(단위: 천원)

사업명	발주금액 ①	계약금액 ②	낙찰차액 (③=①-②)	소요 (필요)액 ④	재배정 요구액 (⑤=④-③)	비 고
기전시설물 일상 유지보수공사	130,000	112,641	17,359	100,000	87,743

○ 도로시설과,  도로시설관리,  기전시설물관리,  도로기전시설물일상유지보수,  시설비

□ 조치의견

○ 낙찰차액 및 재배정(도로시설과)요구액을 활용, 연간단가 도급비 증액  (100,000천원) 변경계약을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함