문서번호	기전과-5782
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
문석기		代조태욱	06/12 이승진
협조

『자하문터널 피난연결통로 방화문 설치』

공사발주 추진계획(보고)

2015. 6

북부도로사업소

(기 전 과)

『자하문터널 피난연결통로 방화문 설치』

공사발주 추진계획(보고)

터널 내 교통사고, 화재 등으로 재난상황이 발생하는 경우 재난 현장을 신속하게 벗어나기 위해 설치된 피난연결통로에 방화문을 설치(신설)하여 연기, 화염 등을 차단시켜 시민의 안전을 확보하고자 함.

１

추진근거

2014년 5월 시설물점검 시 감사지적 사항

도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토해양부, 2009. 8. 24 제정)

5.3.2 설치지침 / (1) 피난연결통로

⑤ 피난연결통로는 평상시 환기의 신뢰성과 화재 시 연기의 유입을 막기 위해서 차단문울 설치한다.

5.3.3 설치사양 / (1) 피난연결통로

② 피난연결통로 차단문의 개구부는 차량용의 경우에는 구급차량이 통과할 수 있도록 3.2(폭)×3.5(높이)m 이상으로 한다

2

사업개요

사업내용

사 업 명 : 자하문터널 피난연결통로 방화문 설치

사업위치 : 서울 종로구 창의문로 5길 4(자하문터널 내)

사업규모 : 방화문 1개소

소요예산 : 100,000천원

구 분	계	도급비	설계용역비
사업비	100,000천원	94,700천원	5,300천원

예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호터널 외 노후방재설비 보완공사, 시설비

4

세부 추진계획

설계용역 시행 : 수의계약

계약업체 : ㈜신화방재

사     유 : 소방시설물 설계경험이 풍부한 업체이며, 설계용역금액이 소액임.

(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호)

계약의뢰 : 2015. 6월(관리단속과장)

방화문 설치공사 시행

발주방식 : 일반 공개경쟁 입찰(참가자격 - 시방에 따름)

공고 및 계약의뢰 : 2015. 7월(관리단속과장)

준공 : 2015년 10월(예정)

. 끝.