함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	도로점용공사장 교통소통대책(도로점용기간) 변경 승인 요청

1. 서울시교통운영과-2137(2015.2.3.) 및 -20915(2014.11.06)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 2014년 제16차 도로점용공사장 교통소통대책 자문완료한 아래 공사건에 대하여 도로점용기간 변경사항이 발생하여 불가피 아래와 같이 변경 승인을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 공 사 명 : 신길주유소앞 ~ 우신초사거리 간 송배수관정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : 구경 800mm, 연장 1,000m(노후송배수관정비)

점용 3.5m × 22m = 77㎡, (신길로 – 시도)

다. 변경내용 : 장애물 이설 등 추가공사와 도로굴착승진 지연에 따른 공기 연장

※ 공사기간 : 당초 2014. 10. 27. ~ 2015. 06. 21

변경 2014. 10. 27. ~ 2015. 09. 12

라. 요청내용 : 도로점용기간 변경승인 요청

※ 점용기간 : 당초 2015. 04. 01 ~ 2015. 05. 31

변경 2015. 05. 20 ~ 2015. 08. 12

따로붙임  : 교통소통대책 변경보고서 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	최희권		시설관리과장	06/12 우종근
협조자
시행	시설관리과-12981	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470-11 (여의대방로10길 97)	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개