문서번호	시설과-4234
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
오영근	강민수	06/12 代한종수
협 조

2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)  설계변경(1차) 검토보고

2015.05.

중부공원녹지사업소

시설과

2015년 전기설비 유지보수공사』

설계변경(1차) 검토보고

「2015년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」의 1차 작업지시 완료에 따른 작업물량 변경 및 신규 공종 추가로 인한 1차 설계변경 사항 보고 임.

공사개요

공 사 명 : 2015년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : ㈜한양케이앤이  (대표 : 김홍인)

공사금액 : 금132,361,270원

계약일자 : 2015.03.23

착공일자 : 2015.03.23

준공기한 : 2015.12.31

설계변경 주요사유

변경근거 : 시설과-4210(2015.6.11.) 작업지시(1차) 완료보고

- 남산 및 산하공원 노후 전기시설 및 조도개선 작업 등으로 인한 작업 물량 변경.

- 기타 전기시설물 보수작업으로 인한 신규 공종 추가 등.

설계변경 내용

설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		변경전	변경후	증감	비고
		금 액	금 액
도급비	공 사 원 가	120,328,427	120,328,427	-
	부 가 가 치 세	12,032,843	12,032,843	-
	계	132,361,270	132,361,270	-

※신규 공종 물량이 추가되였으나 계약 물량 변경으로 계약금은 변동 없음.

조치의견

상기 계약금 변동 없이 정산 설계변경(1차) 시행하고자 함.

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.