문서번호	공간정보담당관-6454
결재일자	2015.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보기획팀장	공간정보담당관
김우철		박대군	06/15 조봉연
협조
	주무관		곽인선

2015년 서울특별시 지리지 제작 및 발간 사업 월간 보고(5월)

2015. 6.

정보기획관

(공간정보담당관)

월 간 업 무 보 고 서

사업명	서울특별시 지리지 제작 및 발간
수신처	서울특별시 공간정보담당관	발신처	(사)대한지리학회
사업기간	2015. 4. 20. ~ 2015. 5. 31.	보고일	2015. 6. 15.
주요 내용	계약 체결 및 착수보고회 개최 집필진·편집진·자문진 구성 완료 편집기본방향 결정

1. 주요 진행 사항

항목	주요 사항	진행일
과제 운영	계약 착수계 제출 착수보고회	2015. 4. 14. 2015. 4. 21. 2015. 5. 18.
조사 및 집필	집필진 구성 완료	2015. 5.
편집 및 심의	편집진 구성 완료 편집회의 개최	2015. 4. 2015. 5. 1.
자문 및 감수	자문위원회 구성 완료	2015. 5. 17.
교열 및 인쇄	인쇄업체 접촉(푸른길)	2015. 5. 29.

2. 금월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행여부
과제 운영	발주 및 작업시행계획서 제출 사업기간 : 2015. 4. 20. ~ 2015. 12. 15. (8개월) 착수계 제출 착수보고회 진행 착수보고회 회의록 첨부	4/14 4/21 5/18	100% 100% 100%
조사 및 집필	집필진 구성 완료 집필위원장 박병익(서울대) 외 14명(예상) 「미래서울」장 집필위원 선정 중	5월 내	93%
편집 및 심의	편집진 구성 완료 편집위원장 이상일(서울대) 외 4명 편집회의 개최 및 편집기본방향 결정 편집회의 회의록 첨부	4월 내 5/1	100% 100%
자문 및 감수	자문위원 선정 완료 이금숙(성신여대), 박경(성신여대), 강영옥(이화여대), 안영진(전남대), 구자용(상명대), 김영훈(교원대), 권정심(국토지리원) 이상 7명	~ 5/18	100%
교열 및 인쇄	인쇄업체(푸른길 외)와 출판 예산 및 일정 협의	5월 내	20%

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

3. 익월 업무 진행 현황

	업무 진행 현황	진행일정	진행목표
과제 운영	집필진 및 편집진 전체회의	6/5	100%
조사 및 집필	집필진 자료조사 및 분석 집필 착수	6/15~8/15 6/15~8/31	25% 20%
편집 및 심의	편집세부계획 수립 집필물 및 참고자료 공유를 위한 온라인 작업공간 개설(웹하드)	6월 내 ~ 6/12	100% 100%
자문 및 감수	발간항목 확정	6/15	100%
교열 및 인쇄	인쇄 및 출판 예산 협의 인쇄 및 출판 일정 협의	~ 8/31 ~ 8/31	40% 60%

2015 서울특별시 지리지 제작 및 발간                                                         (사)대한지리학회

4. 산출물 관리

산출물 명	주요 내용	파일 명	상태
과제 운영	착수보고회 회의록	150518 – 착수보고회 회의록.hwp
조사 및 집필
편집 및 심의	편집회의 회의록	150501 – 서울지리지 편집회의록.hwp
자문 및 감수
교열 및 인쇄

5. 주요 추진일정 개관

구 분 기 간		제1월		제2월		제3월		제4월		제5월		제6월		제7월		제8월
계획수립 준비	발주 및 과업시행계획서 제출
	편집진, 집필진 구성 및 세부계획 수립
	자문위원회 구성
조사, 자료수집 및 분석, 초안 작성	발간내용 확정
	집필진 자료조사 및 분석
	집필 원고 초안 작성
편집 및 심의	발간내용에 대한 편집회의
	발간내용 초안 마련
	편집자료 수집
감수, 자문, 심의	초고 편집 및 검토
	교정본 가안 확인 및 초벌 인쇄
	심의 요청
심의결과 조치, 인쇄 및 제출	추가 교열 및 심의결과 반영
	인쇄작업
	최종본 완성
	전자책 완성

*****************************

**********************************