함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	기술용역 준공기한 연기 계약변경 의뢰(강북)

1. 우리과에서 시행하고 있는 “교통 소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계(강북)”와 관련입니다.

2. 위 용역과 관련 준공기한을 연기코자 아래와 같이 계약변경을 요청하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계용역(강북)

나. 용 역 사 : ㈜동일기술공사

다. 용역기간 : 13.3.12 ~ 14.03.11

라.  용 역 비 : 165,958천원

마. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비

바. 준공기한 연기요청내용

구 분	도급금액 (천원)	용 역 기 간		비 고
		당 초	변 경
전체	165,958,000	2013.3.12 ~ 14.03.11	2013.3.12 ~ 14.09.30	증203일

사. 귀책소재 : 서울시

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 1. 준공기한연기보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 도급계약내역서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	교통운영과장
주무관	황윤기		교통개선팀장	박용우		교통운영과장	03/06 강진동
협조자	주무관	문기영		계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-4330	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시 서소문별관 1동 6층 도시교통본부 교통운영과	/
전화	02-2133-2463	/전송	02-2133-1054	/		/	대시민공개