문서번호	토목부-12229
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	06/15 노우성
협조

감리용역(총괄6회, 5차1회) 변경 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로개선공사 외 1건 통합 전면책임감리용역)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토목부)

감리용역(총괄6회, 5차1회) 변경 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 외 1건 통합 전면책임 감리용역)

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」보조감리원(안전분야) 추가투입 및 총괄 용역기간 조정에 따른 책임감리용역 설계변경 검토보고임

1		관련근거

❍ 토목부-1732(2015. 1.29.) 2015년 전담감리원 배치계획

❍ 한국종합 2015-06-218(2015. 6. 9.) 감리용역 설계변경 설계서 제출

2		사업개요

❍ 공사개요

- 규    모 : 기존고가 철거 B=16.0m, L=510m

고가설치 B=6.4m, L=115m / B=10.4m, L=290m

- 사업기간 : 총괄, 2011. 1. 6.  ~ 2015.12.31.

- 총사업비 : 27,300,000천원

- 도 급 사 : ㈜흥화 외1개사

❍ 용역개요

- 용역기간 : 총괄 → 2010.12.31. ~ 2015. 2.28.

- 용 역 비 : 총괄 → 2,035,400천원(5차: 481,100천원)

- 용 역 사 : ㈜한국종합기술, 대표 이강록 외 1개사

3		감리사 제출내용

❍ 주요내용

- 총괄 용역기간 시설공사 준공후 1개월 조정(당초 : 2016. 2.28.→변경 : 2016. 1.31.)

- 보조감리원(강교) 배치계획 변경에 따른 조정(당초 : 8개월→변경 : 10.31개월)

- 보조감리원(안전) 추가배치

❍ 총괄 변경내용

-  감리원 투입계획 변경                                                   (단위 : 개월)

구 분	당 초	변 경	비 고
수석감리사	62	57.76	감 4.24개월/토목
감리사보	88.25	92.69	감 4.24개월/토목
			증 6.37개월/안전

- 용역비 및 용역기간 변경현황                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2010.12.31. ~ 2016. 2.28.	2010.12.31. ~ 2016. 1.31.	감 1개월
용 역 비	2,035,400,000	2,003,800,000	감 31,600,000

❍ 5차 변경내용

-  감리원 투입계획 변경                                                 (단위 : 개월)

구 분	당 초	변 경	비 고
수석감리사	12	12	-
감리사보	25.55	32.28	증 6.73개월/안전

-  용역비 변경현황                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	481,100,000	549,100,000	증 68,000,000

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 상기 감리단 보고내용 검토결과 용역기간 시설공사 준공후 1개월 조정 및 안전분야        감리원 추가투입, 강교감리원 투입기간 조정에 따른 총괄분 감액(31,600천원)         및 5차분 증액(68,000천원) 조치가 필요함

※ 5차분 증액분 확보방안

-  2015년 전담감리원 배치계획(‘15.01.29.)에 의거 안전분야 감리원 추가투입

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 일반회계, 공사장안전관리대책추진,                       감리비(증 68,000천원)

❍ 상기 사항에 대하여 변경계약을 체결하여 원활한 사업을 추진하고자 함

❍ 총괄 및 5차 변경계약 내용                                          (단위 : 원)

구 분	용 역 비		용 역 기 간		비 고
	당초	변경	당초	변경
총 괄	2,035,400,000	2,003,800,000	2010.12.31. ~ 2016. 2.28.	2010.12.31. ~ 2016. 1.31.
5 차	481,100,000	549,100,000	2015. 1.15. ~ 2016. 1.31.	변경없음

붙 임 : 1) 감리사 설계변경 요청서 1부.

2) ‘15년도 전담감리원 배치계획 1부.  끝.