문서번호	정수시설과-5457
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김오열		06/15 유영춘
협조	주무관		오재승
	주무관		김정녕

취수펌프 제작구매설치 추진일정 보고

2015.6.11

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

취수펌프 제작구매설치 추진일정 보고

금년도 『취수용 모터펌프 구매설치』건은 계약체결 및 제작도면 승인을 완료하였으며 향후 아래와 같이 추진 할 계획임을 보고 드림.

Ⅰ. 계약체결 및 추진실적

○ 계약기간 : 2015.4.9.~9.6

○ 계 약 자 : 동아기공(인천광역시 남구 봉수대로 55-49)

○ 계약내용 : 구매설치(800kW) 2대,

○ 계약금액 : 405백만원

○ 추진실적 : 제작도면 승인 완료(‘15.5.18)

Ⅱ. 추진 일정

구 분			추 진 일 정(일자)
			8.18	8.21	8.24	8.25	8.29	9.1	9.2
구매설치 (800kW)	2호
		설치
		시운전
	4호	철거
		설치
		시운전

Ⅲ. 협조사항(전기분야)

○ 모터펌프 교체(960kW→800kW)에 따른 전기시설 보완 필요

- 기존 모터펌프와 신규 구매설치 모터펌프 규격이 다르므로 기동반 등을 적기에 보완(교체 등)하여 모터펌프 납품기한 연기 빌미 사전에 차단 필요