문서번호	총무과-9860
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	06/16 이상국
협 조
	주무관			임봉순

태양광 발전시설 이전 구조틀 설치 계획

- 반포 안내센터 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				21백만원

2015. 6. 15

한강사업본부

총 무 과

태양광 발전시설 이전 구조틀 설치 계획

강서 안내센터 옥상에 설치된 태양광 발전설비의 발전 효율 향상을 위하여 반포 안내센터 보행 데크로 이전 하기 위한 구조틀 공사를 시행 하고자 함

■ 사업기간 : ‘15. 6. 8 ~ ‘15. 6. 30

■ 사업내용

❍ 태양광 발전설비 이전 구조틀 설치

- 보행데크 부분 철거 : 구조틀 기둥 위치 데크목재 철거 및 보강

- 구조틀 설치 : 각파이프 구조틀

■ 소요예산 : 20,570천원(부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

■ 추진방법 : 수의계약

■ 추진계획

❍ 2015. 6. 8 ~ 6.10 : 현장조사

❍ 2015. 6.11 ~ 6.12 : 구조틀 설치방안 검토

❍ 2015. 6.15 ~ 6.19 : 방침·공사 발주 및 계약

❍ 2015. 6.20 ~ 6.30 : 공사 착공 및 추진

❍ 2015. 6.30 : 공사 준공(예정)

별첨 : 1. 현황사진 1부.

2. 내역서(건축) 1부.