문서번호	급수운영과-4641
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		남부수도사업소장
남철우	강동길	장시명		03/06 전영석
협 조
	주무관		최선보

설계변경(제2회) 검토 보고

(2013년 가산동외 9개동 상수도공사)

2014. 3.

급수운영과

설계변경(제2회) 검토 보고

(2013년 가산동외 9개동 상수도공사)

「2013년 가산동외 9개동 상수도공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따라  물량 증․감이 예상됨에 따라 설계변경 공사추진에 만전을 기하고자함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 가산동외 9개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요

- 당 초 : D=13~300㎜, L=1,996m

- 변 경 : D=13~300㎜, L=1,996m

○ 계약기간 : 2013.7.8. ~ 2014.6.30.

○ 계약금액 : 금559,452,582원

○ 계 약 자 : (주)고황 대표 김미숙

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

(제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정)

□ 설계변경 사유

○ 공사시행중 현장 시공여건 변화에 따른 물량변동(증․감) 발생

- 벽체계량기 설치공(13mm) 등 150개 공종(자재) 물량변동

□ 설계변경 내역

○ 주요 물량 증․감

공 종	규 격	수 량			금 액(원)
		단위	당초	변경
아스팔트포장깨기	굴삭기 0.4㎥(브레이카)	㎥	29	5	△314,832
토사절취	견질토사	㎥	82	104	343,200
인력터파기(용수,협소)	견질토사 0-1m(지세)	㎥	574	724	4,563,150
터파기(기계100%)불량	굴삭기 0.2㎥	㎥	946	563	△2,685,979
벽체계량기설치공	13mm	개소	869	1085	3,716,064
슬립조인트접합공	30mm	개소	182	231	324,478
주철직관부설공	150mm	m	494	417	△601,524
CONC포장(인력비빔)소폭띠모양	t=20,10㎡이하,(분산,지세)	a	0.5	0.1	△3,145,008
CONC포장(기계비빔)소폭띠모양	t=20,10㎡이하,(분산,지세)	a	0.7	0.1	△2,439,682
고압블록포장(소규모10㎡이하)	T=6~8cm,(분산,지세)	a	1	0.3	△808,411

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공급가액	499,831,330	499,831,330	0
부가가치세	49,983,133	49,983,133	0
부지임대료	9,638,119	9,638,119	0
도 급 비	559,452,582	559,452,582	0

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 ‘설계변경 심의위원회’ 사전심의를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경 재계약 후 공사 추진에 만전을 기하고자함.

붙 임 : 1. 설계변경 사전심의 요청서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.