문서번호	하천관리과-9611
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		청계천관리팀장	하천관리과장
이병우		김석권	06/16 정중곤
협조

『수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획』

용역 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.   .

도시안전본부

(하천관리과)

『수표교길 연결 부변정비 방안 타당성조사 및 기본계획』용역

준공기한 연기 검토보고

『수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획』용역에 대한 청계천시민위원회 요구사항 검토 및 자문 등을 위하여 준공기한을 연기코자 함

□ 용역개요

❍ 용역명 : 수표교길 연결 주병정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역

❍ 용역기간 : ‘14. 6. 30. ~  ‘15. 6. 30.

❍ 용역업체 : ㈜한일이엔씨 대표 손흥일

❍ 용 역 비 : 183,676,000원

□ 추진경위

❍ 2014. 08. 22 : 용역 착수보고

❍ 2014. 10. 17 : 전문가 자문회의 개최

❍ 2014. 10. 31 : 1차 중간보고회 개최

❍ 2014. 12. 19. : 2차 중간보고회 개최

❍ 2015. 02. 27. : 3차 중간보고회 개최

❍ 2015. 06. 05. : 4차 중간보고회 개최

□ 준공기한 연기

❍ 준공기한 연기내용

구 분	과업기간	용역비	비고
당 초	‘14. 7. 28 ~ ’15.6. 30	183,676,000원	용 역 비 변동없음
변 경	‘14. 7. 28 ~ ’15.12.31

❍ 연기사유

- 수표교 중건방향 추가검토 2개월 추가 소요

- 청계천시민위원회 및 3개분과회의 논의 2개월 소요

- 용역결과 보고서 작성 2개월 소요

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

❍ 수표교 중건방향 추가 검토, 청계천시민위원회 마무리 자문 및 보고서 작성 등의 이행에 필요한 일정을 감안 준공기한을 2015년 12월 31일까지 연기조치 의뢰코자 함.

붙임 : 관련 공문 및 준공기한 연기조치의뢰서 각1부.  끝.