문서번호	도로계획과-8263
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장		도시안전기획관
신대식	오재영	최동필		06/16 권기욱
협 조

여의교 확장 외 1개 사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연기 보고서

2015. 6

도시안전본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□	㈜건화, ㈜도화엔지니어링
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역

준공기한 연기 보고서

1. 용역개요

용역명	여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역
계약자	㈜건화 대표 최진상 외 1
계약금액	금삼억이백삼십구만구천원정(￦302,399,000)
계약년월일	2012.04.05
착수년월일	2012.04.12
준공예정일	2015.06.30

2. 보고내용

본 용역에 대한 과업기간을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한

- 당 초 : 2015.06.30.

- 변 경 : 2015.12.30

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 지반조사를 위한 하천점용허가(서울지방국토관리청) 협의 및 건설기술심의, 실시설계 시행 등 행정절차 이행에 따른 추가 설계기간이 필요하므로 준공기한을 연기하여 용역수행에 만전을 기하고자 함.

2015. 6.

보고자 : 지방시설주사   신 대 식