문서번호	설비부-7140
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		유병기	06/16 박기형
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

실정보고(감리원 투입계획) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

실정보고(감리원 투입계획) 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역」감리원 투입계획 변경에 대한 실정보고 검토 보고 임.

Ⅰ				용역개요

○ 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역

○ 용역기간 : 총차 2012.01.02.~2016.03.31.

○ 계약금액 : 2,183,947천원

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링, ㈜범한엔지니어링

○ 사업규묘 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

Ⅱ				실정보고 내용

○ 관련근거 : 서분감 제2015-367(2015.6.15.)

○ 감리원 투입계획 변경 사유

- 공사 준공일이 ‘15.7.18. → ’16.6.30.로 변경됨에 따라 감리수행           기간 변경 필요

- 2015년 안전감리원 예산반영에 따른 투입기간 연장.

○ 주요 변경내용

구분	당 초	변 경	증.감	비 고
용역기간	2012.01.02. ～ 2016.03.31.	2012.01.02. ～ 2016.07.31.	증 4개월
계약금액	2,183,947,000원	2,622,329,000원	증)438,382,000원 (안전감리비 87백만원 포함)

○ 감리원 투입기간 변경내용

구 분	등 급	배치기간(개월)			비고
		당 초	변 경	증,감
책임감리원	수석감리사	43.028	46.937	3.909
기계보조	감리사보	10.954	23.863	12.909
토목보조	감리사보	24.319	30.228	5.909
안전보조	감리사보	11.254	21.092	9.838	기승인, 설비부 -1511, -2886
전기보조	중급	12.238	18.227	5.989

Ⅲ				조치의견

○ 공사 준공기한 연기에 따라 시공사의 변경된 계획공정에 적합하도록         분야별 감리원 투입기간 조정이 필요하며,

○ 감리 업무 수행에 차질이 업도록 감리비 증액 및 감리기간을 연장하여         안전 및 품질관리 등 공사관리에 만전을 기하고자 감리원 투입계획 변경         실정보고를 승인하고자 합니다.

따로붙임 : 감리단 실정보고 1부. 끝.