함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(최종)시행(2014년 북부수도사업소관내 긴급누수복구공사)

1. 우리사업소에서 시행중인『2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속 단가계약)』에 대하여 아래와같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가.  공사명 : 2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사(장기계속 단가계약)

나. 계약업체 : ㈜소니종건   대표 유연학

다. 공사기간: 2014.7.1.~2015.6.30

라. 계약금액(최종)

구분	당초	변경	증·감	비고
도급액	1,846,577,900	1,920,017,000	증 73,439,100

마. 계약금액 변경사유 : 신규공종 빌생 및 계약물량 증·감

바. 공사개요 : 별첨 설계서 참조

사. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(31201)

배급수비,수선유지교체비,기타교체비,불용관정비(21208)

붙임: 1. 설계변경내역서 1부. 2. 설계변경 보고서 1부. 3. 합의서 1부.

4. 계약금액 검토결과서 1부.

5. 제비율검증 1부.   끝.

주무관	정성식		주무관	이문성		시설관리과장	이계환		북부수도사업소장	06/16 代정의석
협조자	주무관	한경란		계약2팀장	홍연화
시행	시설관리과-9540	(		)	접수		(		)
우	110-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02)3146-3674	/전송	(02)3146-3689	/	jss2020@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)