투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사」기간연장 시행

1. 시설과-2820(2015.6.15.)호와 관련입니다.

2. 『몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사』에 대하여 아래와 같이 기간 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 몽골 울란바타르시 서울숲 어린이놀이터 조성공사

나. 도 급 액 : 금97,800,900원(금구천칠백팔십만구천원)

다. 공사기간 : 2014. 12. 23 ~ 2015. 06. 30

라. 도 급 자 : ㈜엠에스 종합조경  대표 유대준

마. 공사기간연장

┍ 당초 : 2014. 12. 23 ~ 2015. 6. 30

┕ 변경 : 2014. 12. 23 ~ 2015. 8. 30

바. 연장사유 : 몽골 국립공원 요청사항 반영 검토 및 예산확보 협의 등에 기간이 소요되어 당초 계획보다 공사 자재선적 지연으로 공기 연장 필요.  끝.

주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	06/16 진병규
협조자	주무관	이전호
시행	시설과-2849	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동)	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개