투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설경전철(주)
(경유)
제목	L02정거장 A동 3층 기계실 설계변경 및 시공

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『서울시 경전철 수익성 확대방안 조치계획 보고』의 실행방안으로 『우이-신설 도시철도 민간투자사업』L02정거장 기능실을 아래와 같이 변경하고자 하오니 설계변경 후 시공하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경사항

- 당초 연결통로용 환기 및 제연설비를 위한 L02정거장 A동 3층 기계실(99.40 ㎡)을 공실(수익시설로 용도변경)

- L02정거장 연결통로 환기 및 제연은 정거장 지하 기계실 설비의 용량 등을 증설하여 설치

- 설계변경시 건축 관련 부서 등과 긴밀히 협조하여 추진

나. 변경사유: 서울시 경전철 수익성 확대방안에 따른 기능실 용도변경

다. 사업비 : 총사업비내에서 정산.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박철호		설비계획과장	강재천		도시철도설비부장	06/17 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-6189	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7295	/전송	02-772-7308	/	fmpch@seoul.go.kr	/	대시민공개