문서번호	토목부-12464
결재일자	2015.6.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	06/17 노우성
협조

아천IC 접속도로(Ramp-M) 및 육갑문 일대 안전시설 추가설치 검토보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

아천IC 접속도로(Ramp-M) 및 육갑문 일대 안전시설 추가설치 검토보고

도로 유지관리기관(구리시)으로 부터 아천IC 접속도로(중로 3-1호선) 및 육갑문 일대 안전시설 추가 설치 요구사항에 대한 검토 보고임.

※ 암사(감리)2015-323호(’15.6.15.) :  아천IC 접속도로(Ramp-M) 및 육갑문 일대 안전시설 추가설치

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.6.30)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진경위

- 2014.03.03. : 구리시 및 구리경찰서 현장 합동점검

‣ 안전시설(차선규제봉 등) 추가 보완 요구

- 2014.08.01. : 관계기관 합동회의 개최(도기본,구리시)

‣ 강변북로 확장에 따른 육갑문앞 차량충격흡수시설 등 안전시설 추가 보완

○ 안전시설 추가 내용

시 설 명	규 격	단위	계	중로3-1호선	육갑문 연결도로
차선규제봉	250×80×750㎜	개	271	-	271
PE충격흡수시설	900×900×900㎜	개	1	-	1
가드레일	지주보강(완충브라켓) (무등급 → SB-2 등급)	m	348	112	236
안전난간	방부목	m	154	154	-
진입로 포장	사리도(골재포설)	＠	3	3	-
	Con′C(T=20㎝)	＠	0.6	0.6	-
조경석쌓기	500×700×800	㎡	26	26	-
표지판지주보호대		개소	3	2	1

※ 가드레일 연장 추가 : 296m ⇒ 348m (증 52m)

○ 추가공사비

(단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증 · 감
차선규제봉 등 안전시설	12,000	56,000	증) 44,000
도급액	12,000	56,000	증) 44,000

※ 적용단가 : 기계약 공종 → 계약단가 적용, 신규단가 → 협의율 85.367% 적용

○ 감리단 검토의견

- 유관기관(구리시, 구리경찰서) 현장 합동점검 및 회의시 시민 안전시설 추가 보완 요구한 사항으로 설계변경시 반영하는 것이 타당함.

‣ 안전시설 보완 추가 공사비(44백만원) : 적정

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토내용과 같이 ‘아천IC 접속도로(Ramp-M) 및 육갑문 일대 안전시설 추가설치’ 실정보고건에 대해 승인하고 추후 설계변경시 실시공 수량에 따라 정산 처리토록 조치코자 함.

- 아천IC 접속도로(Ramp-M) 및 육갑문 일대 안전시설 추가설치 : 증) 44백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.