문서번호	시설과-732
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
박진우	홍순철	변규열	03/06 이춘희
협 조
	공원운영과장		이상용
	보라매공원관리사무소장		오대근
	조경지원과장		김제중

보라매공원 등 3개소 CCTV설치 계획

동부공원녹지사업소

시설과

보라매공원등 3개소 CCTV설치 계획

공원내 취약지역에 CCTV를 설치하여 각종 범죄로부터의 시민 불안감 해소 및 공원이용 안전을 강화하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

Ⅰ		관 련 근 거	7

❍ 2014년 도시공원․놀이터 CCTV설치계획 통보(정보통신보안담당관

-3147,2014.2.18.)

❍ 2014년 도시공원CCTV설치계획통보 및 설치의뢰(공원운영과-2807

,2014.3.4)

Ⅱ		사 업 개 요	7

❍ 2014년 CCTV 설치계획

기관명	설치장소 및 수량(대)				예산배정액(백만원)			비고
	계	보라매	길동생태	어린이대공원	계	국비	시비
동부공원녹지사업소	9	5	4	-	135	40.5	94.5
어린이대공원	4	-	-	4	60	18	42

❍ 사업기간 : 2014.3월 ~ 7월

❍ 추진방법 : 해당 공원에서 설치대상지 확정후(경찰서 협의), CCTV(영상정보처리기기) 설치 기준에 맞게 설치

Ⅲ		추 진 계 획	7

1. 건   명 : 보라매공원 등 2개소 CCTV구매설치

❍ 예   산 : 135백만원

❍ 수   량 : 9대

- 보라매공원 5대   : 신설

- 길동생태공원 4대 : 신설1대,교체3대

❍ 추진일정 : 2014.03 ~ 07

- 2014.03 : CCTV 설치장소에 대한 경찰서 협의 및 위치선정(각공원)

- 2014.03 ~ 04 : 행정예고(공고일로부터 20일)

- 2014.04 ~ 05 : 구매발주 및 계약

- 2014.05 ~ 07 : 설치 및 준공(인수인계)

❍ 계약방법 : 조달구매

- 발주 및 준공처리 : 시설과

- 설치위치 선정 및 감독업무 : 각 공원

2. 건   명 : 어린이대공원 CCTV 구매설치

❍ 예   산 : 60백만원

❍ 수   량 : 4대 신설

❍ 추진일정 : 2014.03 ~ 06

- 2014.03 : CCTV설치장소에 대한 경찰서 협의 및 위치선정(대공원)

- 2014.03 ~ 04 : 행정예고(공고일로부터 20일)

- 2014.04 ~ 05 : 구매발주 및 계약

- 2014.05 ~ 06 : 설치 및 준공(인수인계)

❍ 계약방법 : 조달구매

- 발주 및 준공처리 : 시설과

- 설치위치 선정 및 감독업무 : 어린이대공원

Ⅳ		행 정 사 항	7

❍ 각 공원 업무담당자 지정 통보(각 공원, 어린이대공원 → 시설과)

❍ 위치선정 결과 및 공사완료보고서 통보(각 공원, 어린이대공원 → 시설과). 끝.