문서번호	관리단속과-6691
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
설한식		06/17 홍영두
협조	과적단속팀장		이신호
	주무관		김윤희

『2015년 차량운행제한 공고 표지판 정비 공사』

설계 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

성동도로사업소

(관리단속과)

『차량운행제한 공고 표지판 정비 공사』설계변경 검토보고

우리사업소에서 관리하는『차량운행제한 공고 표지판』정비공사와 관련 편지식 전도로 표지판 이설 장소가 협소하여 설계변경을 시행 이설을 취소하고 표지판 정비 공사 시행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 관리단속과-4991(‘15.5.6)호 차량운행제한 공고 표지판 정비 계획

공사기간 : ‘15. 5. 29 ~ ’15. 6. 27

공사개요

- 편지식(39) : 정비(38) - 도로법 조문변경 제59조 -> 제77조, 이설(1)

- 부착식(47) : 철거(5), 교체(42) - 문안개선에 따른 표지판 교체

소요예산 : 금18,971,500원

예산과목 : 도시안전본부(교량안전과), 도로시설관리, 도로시설물운영,

운행제한차량단속, 시설비(401-01)

시 공 사 : ㈜현우테크

Ⅱ		검 토 보 고

설계변경 사유

- 편지식 전도로 표지판 1개 : 장소 협소에 따른 이설 취소

공사비 증·감내역

구 분	공사금액 변경내역
	계약금액	변경금액	증, 감)금액
공 사 비	￦ 18,971,500	￦ 17,040,000	-￦1,931,500

공사물량 변경내역

구 분	수량		증·감	비고
	당 초	변경
중형 사각 신설	1	1	-
중형 사각 교체	41	41	-
중형 T형부착대 신설	1	1	-
중형 T형부착대 교체	41	41	-
중형 T형부착대 철거	5	5	-
문언수정(고휘도+초고휘도)	40	40	-
중형 사각 철거	5	5	-
편주(안전표지판용)이설	1	-	감) -1
	135	134	감) -1

Ⅲ		조치의견

상기 내용과 같이 공사물량 감소에 따른『차량운행제한 공고 표지판 정비 공사』설계변경 시행

붙임 : 1.『2015년 차량운행제한 공고 표지판 정비 공사』 설계변경 사유서 검토보고 1부

2. 설계변경 사유서 1부.  끝.