문서번호	시설관리과-4752
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
강판오		03/06 代고신석
협 조
	주무관		고신석

급수공사 연기보고(신설-36)

2014.  3.

명에 의거 『상도1동 외 14개동 상수도공사』 급수공사 감독중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2014. 3. 6.

보고자 : 지방시설주사보 강판오

건   명 : 급수공사 연기 보고

작업지시내역

공사명	접수번호	지시내역
		지시번호	위 치	작업기간	공사종별	시공업체
상도1동외 14개동 상수도공사	201402180013	신설-36	사당동 266-4외 4필지	2.26.~3.06.	신설	태성건설 홍영인

보고내용

○ 상기 현장은 외벽공사 지연에 따른 비계 등 가시설 미철거로 급수공사를 시행 할 수 없으므로 신청인이 준공연기원을 제출하였음

보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 하며, 『2013년 2차 상도1동외 14개동 상수도공사』 계약업체인 태성건설 대표 홍영인에게 작업지시하고자 합니다.

지시번호	주소	당초 기간	변경후 기간	비고
신설-36	사당동 266-4외 4필지	2.26.~3.06.	2.26.~3.20.

붙임 : 준공연기원 1부(별도첨부).  끝.