투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	남산1호터널 수배전반 제작구매설치( 납품기간 연장)

우리 사업소에서 시행 중인 “남산1호터널 수배전반 제작구매설치 ” 물품 제작 구매설치 기간 연장을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 남산1호터널 수배전반 제작구매 설치

나. 도 급 자 : ***************

다. 제작설치 기간 변경 내용

공사 기간		변경 사유
당 초	변 경
2015. 6. 3～ 6. 28	2015. 6. 3～ 7. 15	변압기반 추가 제작 설치로 인하여 절대 공기 부족

라. 계약금액 : 155,000,000원

마. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 남산1호터널 전력설비 보완공사, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 합의 각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	윤석주		기전과장	06/17 이규철
협조자	주무관	홍용현
시행	기전과-6203	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8391	/전송	20-300-8410	/	younsj@seoul.go.kr	/	대시민공개