함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	계약의뢰

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2014년 강서 관내 포장도로 굴착복구공사 (단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰합니다.

가. 공  사  명   : 2014년 강서관내 포장도로 굴착복구공사(단가계약)

나. 계약상대자  : (합)탑성토건 대표 최우찬, 에스제이건설(주) 대표 박창호

다. 계 약 기 간 : 2014. 6. 9 ~ 2015. 6. 30

라. 예 산 과 목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

상수도사업비, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비

소방용수시설 등의 설치 및 관리,소방용수시설설치 및 보수

마. 설계변경 사유 : 공종별 시공물량 증,감 등

바. 설계변경 금액

구 분	당초	변경	증.감
총공사비	1,605,326,300	1,566,300,000	감) 39,026,300
도 급 비	1,255,326,300	1,255,300,000	감) 26,300
관 급 비	350,000,000	311,000,000	감) 39,000,000

(단위:원)

따로붙임 : 1. 설계변경 시행문 1부.

2.  설계변경 심의위원회 개최결과보고서 1부

3. 설계변경 심의 결정서 1부

4. 설계변경 내역서 1부

5. 합의서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김용호		급수운영과장	06/17 조면행
협조자
시행	급수운영과-14068	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3705	/전송		/		/	대시민공개