문서번호	고도정수반-3637
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
라승보	김인규	강신재	06/17 고인석
협 조	생산부장		박용철
	구의아리수정수센터소장		권오식
	정수과장		이태일
	정수시설과장		정인화
	기전설비과장		서대훈
	주무관		윤덕묵
	주무관		박태원
	주무관		심찬석
	주무관		송병욱

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사』

시설물 이관(인수·인계) 계획

2015. 6.

상수도사업본부

(시설안전부)

작 성 자	시설안전부장 : 강신재 ☎3146-1501 고도정수반장 : 김인규 ☎1490 담당 : 송병욱☎1451

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

시설물 이관(인수·인계) 계획

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』가 완료되어 유지관리부서에 시설물 이관을 위한 계획을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간 : 2009.11.23 ~ 2015. 4.20.

○ 도 급 비 : 179,098백만원

○ 공사개요

- 고도정수(오존+입상활성탄) 처리시설 신설 (45만톤/일)

- 표준정수 처리시설 재건설 (25만톤/일)

※ 총 50만톤/일 (기존 3정수장 40 → 25만톤/일 + 기존 1정수장 25만톤/일)

○ 시 공 사 : 대우건설(40%), 두산건설(30%), 이화공영(30%)

○ 감 리 사 : 한국종합기술(70%), 동일기술공사(30%)

□ 시설물 이관계획

○ 유지관리부서, 시공사, 감리사, 시행부서 합동점검 시행

○ 합동점검시 지적사항에 대한 조치후 조치결과 사업소 통보

○ 구의정수센터와 본부 간 인수‧인계서 작성

□ 준공도서 배부계획

○ 준공도서 배부계획 : 별 첨

○ 배부일정 : 2015.6.18.~6.19

□ 시설물 이관을 위한 합동 점검시행

○ 일    시 : 2015. 6. 18.(목)  10:00 ~

○ 대    상 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 점 검 자

- 공사시행 부서 : 시설안전부, 생산부 분야별 공사관리관

- 유지관리 부서 : 구의아리수정수센터 분야별 담당자

○ 입 회 자

- 책임사업관리자  문진환

- 보조사업관리자  박주남, 박현규

○ 점검내용

- 시설물 목록별 정상가동 및 이상여부 확인

- 기타 사항 등

○ 점검결과 조치계획

- 지적사항 중 설계에 반영된 부분은 보완 조치

□ 하자관리에 대한 사항

○ 하자검사 시행 : 유지관리부서(구의아리수정수센터)

근거:①지방계약법 시행령 제70조, 시행규칙 제69조.

②행정2부시장 방침 제27호『최종하자검사 개선』(기술심사담당관-2158, 2014.2.6.)

(10억원이상 공사는 외부전문가 활용, 그 외 내부직원 보강 또는 부서간 교차 점검 실시)

- 정기검사 : 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상

- 최종검사 : 하자담보 기간이 만료되는 최종검사는 지방계약법 시행규칙 제69조, 행정2부시장 방침 제27호에 의거 검사 실시

○ 하자에 대한 조치

- 유지관리부서에서 책임사업관리(CM)사 및 시공사에 하자보수 요청하여 조치

- 시공사와 하자처리에 대한 이견이 있을 경우 공사시행부서와 긴밀히 협조하여 하자보수 조치

□ 행정사항

○ 합동점검시 지적사항 조치 완료후 유지관리부서와 시설물 인수‧인계

○ 합동점검은 특정관리대상시설(대형공사장) 안전점검과 병행 시행

붙임 : 1. 준공도서 배부계획 1부.

2. 시설물 이관 목록 1부(별도 붙임).  끝.