문서번호	시설관리과-12710
보존기간	년
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
강은영	최양주	이자원		06/18 이상래
협 조

·

계약금액조정 심사결과 통보에 따른 보고

(2014년 강서수도사업소 관내 폐기물처리용역-급수공사,누수복구공사)

2015. 6.

강서수도사업소

명에 의거 「2014년 강서수도사업소 관내 폐기물처리용역(장기계속 단가계약)-급수공사,누수복수공사』설계변경(최종)에 대하여 본부(재무회계과) 계약금액조정심사를 완료하고 설계변경시행하고자 아래와 같이 보고합니다.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 2014년 강서수도사업소관내 건설폐기물 처리용역(급수공사, 누수복구공사)

나. 용역규모

구 분	건설폐기물 운반(㎥)	건설폐기물 처리(ton)
계	3,231	7,095
폐아스콘	1,029	2,418
폐콘크리트	1,557	3,581
폐토사	645	1,096

다. 용역기간 : '14.06.27. ~ ’15.06.30.(계약일 ’14.06.25.)

라. 계약금액 : 금 146,541,240원(총 부기금액)

- 1차(2014년) : 금  66,791,000원

- 2차(2015년) : 금  79,750,240원

마. 계약업체 : 가람산업주식회사(주) 대표 고 영 준

바. 감독부서 : 강서수도사업소(시설관리과)

2. 설계변경내역

가. 사   유

- 건설폐기물 운반 및 처리 물량 변동(증․감)

- 계약기간 만료에 따른 최종 변경

나. 물량 증감 내역

(단위, ㎥)

공 종		당 초	변 경	증․감
계		3,231	3,280	증) 49
폐아스콘	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	1,029	650	감) 379
폐콘크리	적치장,현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	1,557	1,490	감) 67
폐토사	적치장,현장→처리장(30㎞) DT 24톤	645	1,140	증) 495

다. 관련문서 : 소장방침 『2014년 강서수도사업소관내 폐기물처리용역 설계변경 보고』

시설관리과 - 12331(2015.06.15)

『계약금액조정 심사결과통보(2014년 강서수도사업소관내 폐기물처리용역)』

본부 재무회계과-7769(2015.06.17)호

3. 보고내용

가. 상기 대호와 같이 계약금액조정 심사결과 통보에 의거 설계시행하고자 함.

나. 주요심사 내용

◆ 공종별 수량검토 : 적정

◆ 신규공종 및 증가물량 검토 : 적정

◆ 제경비 적용 : 적정

다. 설계변경 시행 금액

구 분	심사의뢰금액	심사결과금액	증 ․ 감	설계변경금액
총 용 역 비	158,657,000	157,550,000	감 1,107,000	157,550,000
공 급 가 액	144,233,636	143,227,273	감 1,006,363	143,227,273
부 가 세	14,423,364	14,322,727	감 100,637	14,322,727
계	158,657,000	157,550,000	감 1,107,000	157,550,000

4. 조치내용

본부 계약금액 조정 심사에 의거 『2014년 강서수도사업소 관내 폐기물처리용역(장기계속 단가계약)-급수공사,누수복구공사』 최종설계변경을 실시하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 계약금액 조정 심사 결과 통보 공문 1부.

2. 내역서 1부.  끝

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 시설관리팀장 : 최양주☎4012 담당 : 강은영☎4020