투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	공원에코센터 체험공간 및 전시시설 제작·설치 용역 협상기간 연장

1. 공원에코센터 체험공간 및 전시시설 제작·설치 계획[공원여가과-564호(2015. 4. 15.)] 관련입니다.

2. 위호와 관련하여, 제안서 평가에 의한 우선협상 대상업체와의 협상기간을 아래와 같이 연장하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 공원에코센터 체험공간 및 전시시설 제작·설치 용역

나. 협상업체 : ㈜하랑그룹

다. 협상기간

- 당초 : 2015. 6.  5(금) ~ 6. 19(금) [15일]

- 연장 : 2015. 6. 20(토) ~ 6. 29(월) [10일]

라. 연장사유 : 협상내용 반영을 위한 실시설계 세부내역 조정기간 부족으로 협상 기한 연장 조정

마. 관련규정 : 『지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준』〈제5장 협상에 의한 계약체결기준〉 (안전행정부 예규 제73호). 끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	김병수		공원여가과장	강현주		서부공원녹지사업소장	06/18 안해칠
협조자
시행	공원여가과-948	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 서부공원녹지사업소	/
전화	02-364-4686	/전송	02-393-3710	/		/	대시민공개